특수공시

1. 특수공시	100

특수공시

우리 삼척시는 산과 바다, 동굴과 계곡이 어우러지 해양관광 문화도시로 천혜의 잠재적 관광 자원을 보유하고, 「청정에너지 친환경도시 건설」,「명품 관광도시 조성」,「품격있는 교육․문화예술의 도시 육성」,「복지 사각지대 없는 사회안전망 구축」,「풍요로운 농어촌 건설」,「투명한 행정으로 시민의 삶의 질 향상」등 6대 역점시책을 중점으로 시민중심! 행복삼척! 을 만드는데 최선을 다하고 있습니다.

또한, 시정방침으로「시민참여 소통행정」,「함께하는 복지실현」,「품격높은 교육문화」,「도약하는 삼척건설」을 목표로 시정을 펼쳐 나가고 있습니다.

이에 우리시에서 추진한 지역특성을 고려한 주민관심사항, 대규모 투자사업, 주요현안 및 주민숙원사업, 지역전략산업 등 그 동안의 추진실적을 특수공시 대상사업으로 선정하여 아래와 같이 시민들게 알려드립니다.

특수공시 대상사업 내역

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사업기간	총사업비	사업부서
1	교동굴다리~터미널간 도시계획도로 개설공사	‘10~’16	9,570	도시디자인과
2	돌기해삼 수산종묘 배양장 건립	‘14~’16	7,000	해양수산과
3	산양1리 농어촌마을하수도 정비사업	‘14~’16	3,287	상하수도사업소
4	증산~추암간 도시계획도로 개설공사	‘11~’14	4,900	도시디자인과
5	임원 남화산 해맞이테마공원 조성사업	‘06~’17	17,720	관광정책과
6	도계농협~전두리간 도로확포장공사	‘13~’14	2,905	자원개발과

교동 굴다리 ~ 터미널간 도시계획도로 개설공사

	사 업 목 적
❍ 시가지 진입 교통량 분산에 따른 차량 지 ․ 정체 해소 및 도시환경 정비 ❍ 도시 가로망 확충으로 시가지 교통 체계 개선

사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 3월 ~ 2016년 7월

❍ 사업장위치 : 삼척시 교동굴다리 ~ 터미널간

❍ 총 사업비(예산기준) : 9,570백만원(시비9,570백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 : 9,570백만원(총액대비 100%)

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1,250m, B=25m (대로3-2호선)

❍ 시공회사 : 동도건설(주)

추진상황

❍ 삼척보건소~백조APT간 도시계획도로개설공사(1차) 준공 : ‘10. 12월

❍ 백조APT~소공원간 도시계획도로개설공사(2차) 준공 : '11. 12월

❍ 교동굴다리~소방서간 도시계획도로개설공사(3차) 준공 : ‘14. 4월

❍ 삼척소방서~동두고개간 도시계획도로개설공사(4차) 준공 : ‘14. 8월

❍ 미륵바위~터미널간 도시계획도로개설공사(5차) 착공 : ‘14. 4월

※ 총공사 진척률 : 85%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	7,300	2,800	500	4,000
국 비
도 비
시 비	7,300	2,800	500	4,000
기타(민자)

사업효과

❍ 도시계획 도로개설로 도로망 확충 및 지역간 균형개발 도모

❍ 교통량 분산에 따른 시가지 교통정체 해소와 통행편익 제공

사업장 전경사진

돌기해삼 수산종묘 배양장 건립

	사 업 목 적
❍ 강원 바다 자생 돌기해삼은 고부가가치 상품으로 무한 잠재력과 경쟁력이 탁월하여 우리시의 새로운 전략품목으로 육성 ❍ 돌기해삼 수산종묘 대량생산 ․ 방류를 통해 지속가능한 어업생산 활동 지원

사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

❍ 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 갈남리 456-1외 5필지

❍ 총 사업비(예산기준) : 7,000백만원(국비2,500백만원, 도비700백만원, 시비3,800백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 : 7,000백만원(총액대비 100%)

❍ 사 업 량 : 지상3층 1동, 2,451.37㎡

❍ 시공회사 : (주)신도종합건설외 6개사

추진상황

❍ 2014. 11. 19 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2015. 01. 20 : 공사착공

❍ 2015. 04. 28 ~ 현재 : 신남분교 철거완료 및 1층 보, 슬라브 거푸집공사 중

※ 총공사 진척률 : 20%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	1,758	139	186	1,433
국 비	1,170	87	167	916
도 비	182	17	19	146
시 비	406	35	-	371
기타(민자)	-	-	-	-

사업효과

❍ 돌기해삼 종묘 대량생산․방류로 연어어장 자원회복 및 해양생태계 복원

❍ 고부가가치 돌기해삼 종묘 방류를 통한 어업인 소득증대 기여

사업장 전경사진

산양1리 농어촌마을하수도 정비사업

	사 업 목 적
❍ 생활오수의 적정처리로 공공수역의 수질개선 및 하수처리 효율성 제고 ❍ 농어촌 지역의 주거환경 및 정주여건 개선

사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

❍ 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 산양1리

❍ 총 사업비(예산기준) : 3,287백만원(국비2,300백만원, 도비295백만원, 시비692백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 :  3,287백만원(총액대비 100%)

❍ 사 업 량 : 하수처리장 40㎥/일, 오수관로 2.85㎞, 펌프장 1개소

❍ 시공회사 : (주)경동건설

추진상황

❍ 마을하수처리장 건물 신축 완료

❍ 오수관로공사 L=1.5㎞

※ 총공사 진척률 :  75%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	1,285	-	716	569
국 비	924	-	500	424
도 비	108	-	64	44
시 비	253	-	152	101
기타(민자)	-	-	-	-

사업효과

❍ 안정적 하수처리로 지역주민 생활환경 및 정주여건 개선

❍ 생활하수의 원천적 분리 및 차집으로 하천오염 예방 및 수질개선

사업장 전경사진

증산 ~ 추암간 도시계획도로 개설공사

	사 업 목 적
❍ 삼척시와 동해시 경계 해안 관광지 연결도로 개설 시급 ❍ 이사부 사자공원과 연계한 도로 개설로 주민 통행편익 도모 및 관광 인프라 구축

사업개요

❍ 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2014년 9월

❍ 사업장위치 : 삼척시 증산동 85-2번지 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 4,900백만원(도비150백만원, 시비4,750백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 :  4,900백만원(총액대비 100%)

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=460m, B=30m (대로2-1호선)

❍ 시공회사 : 동진건설(주)

추진상황

❍ 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 : ‘11. 1월 ~ ’13. 2월

❍ 공사착공 : 2012. 6. 8

❍ 공사준공 : 2014. 9. 30

※ 총공사 진척률 : 100%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	2,800	1,500	1,300	-
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	2,800	1,500	1,300	-
기타(민자)	-	-	-	-

사업효과

❍ 시 경계 해안도로 개설로 관광객 유입등 관광인프라 구축

❍ 관광객 유치를 통한 지역 경기활성화 및 주민 통행편익 증대

사업장 전경사진

임원 남화산 해맞이테마공원 조성사업

	사 업 목 적
❍ 도 경계권 종합개발계획과 연계한 체류형 해맞이 테마공원 조성 ❍ 천혜의 해양관광자원 개발을 통한 사계절 관광지 기반시설 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2006년 ~ 2017년

❍ 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 임원리 산323-1번지 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 17,720백만원(국비3,500백만원, 도비700백만원, 시비13,520백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 : 5,192백만원(총액대비 29%)

❍ 사 업 량 : 수로부인 헌화공원 조성 26,870㎡

❍ 시공회사 : 대금종합건설(주)외

추진상황

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 : 2006년

❍ 공원구역내 사유지 토지보상 협의 및 보상 : 2007년 ~ 2009년

❍ 남화산 진입로 정비공사 : 2008년

❍ 공원정상부 경관개선 공사 및 상징조형물 설치공사 : 2014년

※ 총공사 진척률 : 75%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	9,049	2,047	3,796	3,206
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	9,049	2,047	3,796	3,206
기타(민자)	-	-	-	-

사업효과

❍ 도 경계권 종합개발계획과 연계한 체류형 해맞이 테마공원 조성

❍ 천혜의 해양관광 자원 개발을 통한 사계절 관광지 기반시설 조성으로

지역경제 활성화 도모

사업장 전경사진

도계농협~전두리간 도로확포장공사

	사 업 목 적
❍ 기존 도로(폭 B=3.0m)가 협소하고 인도가 없어 차량과 주민(학생)이 같이 이용하고 있어 사고발생 우려에 따른 주민 통행 불편 해소 및 환경정비를 통한 쾌적한 도시 생활공간 제공

사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 2월 ~ 2014년 12월

❍ 사업장위치 : 삼척시 도계읍 전두리 35-8번지 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 2,905백만원(기금 2,900백만원, 시비5백만원)

※ 2015. 7월현재 예산확보액 : 2,905백만원(총액대비100%)

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=417m (B=10m)

❍ 시공회사 : (주)경원건설

추진상황

❍ 공사착공 : 2013. 11. 15

❍ 공사준공 : 2014. 12. 23

※ 총공사 진척률 : 100%

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)
	계	2013년	2014년	2015년 7월 현재
계	2,174	1,008	1,166	-
국 비
도 비
시 비
기타(기금)	2,174	1,008	1,166	-

사업효과

❍ 도로 확포장을 통한 지역주민의 통행 불편 해소

❍ 환경 정비를 통한 쾌적한 도시 생활공간 조성

사업장 전경사진