10-1. 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

원덕도서관 개축사업

담당자

평생교육과 김흥권

(☎033-570-4445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 원덕도서관을 중앙정부에서 추진하는 생활 SOC 사업과 연계하여       개축함으로써 원덕 평생학습센터 및 청소년 문화의집과 함께 원덕읍 주민들의       복합 문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼척시 원덕읍 호산리 364번지

○ 규 모 : 도서관 개축 1동(1,732㎡, 지하 1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,800	2,496	3,504	800
국 비	1,200	1,200
시 도 비	560	360	200
시군구비	5,040	936	3,304	800
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

○ 생활 SOC 복합화 사업신청 및 확정 : 2019. 7월 ~ 9월

○ 건축 조달청 설계공모 추진 : 2020. 8월 ~ 11월

○ 기존 원덕도서관 철거공사 완료 : 2020. 11. 25.

○ 개축공사 기본 및 실시설계용역 완료 : 2021. 10월

○ 공사 착공 : 2021. 12. 3.

○ 동절기 공사 일시정지 : 2021. 12. 29. ~ 2022. 2. 24.

○ 공사 재착공 후 3층 철근콘크리트 공사 완료 : 2022. 2. 25. ~ 2023. 2. 5.

○ 동절기 공사 일시정지 : 2023. 2. 6. ~ 2023. 3. 5.

○ 공사 재착공 : 2023. 3. 6.

□ 향후계획

○ 개축공사 준공 : 2023. 10월

○ 도서관 개관 : 2023. 10월 이후

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

구 분	당 초	현 재
사업규모	도서관 개축 1동 지하1층~지상3층(연면적1,552㎡)	도서관 개축 1동 지하1층~지상3층(연면적1,732㎡)
총사업비	4,800백만원	6,800백만원
사업기간 (공사기간)	2020. 1월 ~ 2021. 9월	2020. 1월 ~ 2023. 10월

사업명

삼척 두타산 810 숲속야영장 조성사업

담당자

산림과 박원기(☎570-3864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 관광자원과 연계 운영하여 주민 소득증대 도모 및 전국 최고의 청정       국민건강 힐링 단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼척시 하장면 번천리 산15번지 일원

○ 규 모 : 야영장 52면(차박 19, 글램핑 3, 캠핑카 3, 오토캠핑 12, 게르 3,               이글루 2, 트리하우스 3, 트리야영장 5, 반려견 2), 관리사무소 1동,                    복합위생시설 1동 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,140	150	2,900	1,090
국 비	1,000	75	925
시 도 비	300	23	277
시군구비	2,840	52	1,698	1,090
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 숲속야영장 조성사업 실시설계용역 : 2021. 2월~2021. 11월

○ 숲속야영장 조성계획 승인 : 2022. 8월

○ 숲속야영장 조성사업 착공 : 2022. 8월

□ 향후계획

○ 숲속야영장 조성사업 준공 : 2023. 12월

□ 사업변경 내역

구 분	변경	당초
사업기간	2021년~2023년	2021년~2022년
부지면적	11.3㏊	10.6㏊
시설면적	10,980㎡	10,600㎡
총사업비	4,140백만원	2,300백만원

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

산림과 김강민(☎570-3429)

산림과 박원기(☎570-3864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유휴지 및 기존 녹지 공간을 활용하여 미세먼지 차단숲을 집중 조성함으로써       미세먼지를 차단하여 시민들에게 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. 09. ~ 2023. 6. 30.

○ 위 치 : 삼척시 교동 396-3번지(삼척복합체육공원 유휴지) 외 1개소

○ 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 2.0ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	2,000	-	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	700	-	700	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 미세먼지 조성사업 계획 수립 : 22. 01월

○ 조성사업 편입구역 확정 및 실시설계 완료 : 22. 03월~04월

○ 계약심사 완료 및 사업착수 : 22. 5월

○ 미세먼지 조성사업 준공 완료 : 23. 06월

□ 향후계획

○ 병해충 방제, 관수 시행, 제초작업, 수목 가지치기 등 유지관리

사업명

흥전4리 삭도마을 새뜰마을사업

담당자

도시과 최승권(☎570-3446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 안전한 주거환경 조성을 통한 삶의 질 향상, 주민들의 생활과 밀접성이 높은 주택 정비 및 공동이용시설 조성계획 수립을 통해 주민들의 생활환경개선 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년3월 ～ 2025년12월( 3년10개월 )

○ 위 치 : 삼척시 도계읍 흥전4리(3~10반) 삭도마을

○ 규 모 : 안전확보, 주택정비, 생활인프라, 주민역량강화, 휴먼케어

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,983백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,983		571.4	428.6	2,983
국 비	2,425		400	300	1,725
시 도 비	311.7		51.4	38.6	221.7
시군구비	727.3		120	90	517.3
지 방 채
민간자본	519				519
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 마스터플랜 제출 및 보완 : 2023. 7. ~ 8.

○ 우선사업 용역 추진 : 2023. 7. ~ 9.

□ 향후계획

○ 마스터플랜 승인 : 2023. 9.

○ 우선사업 공사 추진 및 본사업 추진 : 2023. 10. ~ 2025. 12.

사업명

교동(광진)진입도로(소로1-12)

개설공사

담당자

도시과 최승권(☎570-3446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국방과학연구소 조성사업 관련하여 광진마을 주민건의에 따라 주거지역의 교통망 확충 및 접근로 설치로 생활여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년1월 ～ 2027년12월( 11년)

○ 위 치 : 교동(세무서 앞) ~ 광진(새천년도로 일원)

○ 규 모 : 도시계획도로 890m(폭 10.0m)(터널 307m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,700	483	97	-	17,120
국 비
시 도 비
시군구비	17,700	483	97	-	17,120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 설계안전성 검토 및 경제성검토 완료 : 2022. 6. 13.

○ 강원도 건설기술위원회 기술심의 : 2022. 12.

○ 실시계획 인가고시 : 2023. 6. 22.

□ 향후계획

○ 마스터플랜 승인 : 2023. 9.

○ 우선사업 공사 추진 및 본사업 추진 : 2023. 10. ~ 2025. 12.

사업명

오분공원 주차장 조성

담당자

도시과 최승권(☎570-3446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시공원의 쾌적하고 안전한 공원조성으로 주민들의 휴식공간 조성

○ 도시공원 내 주차장 시설 부재로 인한 주민 이용불편 고려

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년10월 ～ 2024년12월( 2년3개월)

○ 위 치 : 오분동 산12번지 일원

○ 규 모 : 주차장조성 1식(전체면적 2,200㎡/시설면적 2,130㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,450	-	-	300	2,150
국 비
시 도 비
시군구비	2,450	-	-	300	2,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 투자심사 : 2022. 8. 11.

○ 실시설계용역 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 10.

○ 실시계획 인가고시 : 2023. 11.

□ 향후계획

○ 손실보상 협의 : 2024. 1. ~ 6.

○ 지장물 철거 및 주차장 개설 : 2024. 7. ~ 2024. 12.

사업명

1시군 1대표 공연 발굴·지원사업

담당자

문화홍보실 전유진(☎570-3224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척지역의 예술적 자산을 공유함으로써 시민들에게 수준 높고 다양한 문화공연을 제공하여 문화 향유 분위기 확산 및 제고

○ 청년 이사부의 생명존중의 정신으로 올림픽 정신 함양

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 11월 ~ 12월[2개월]

○ 위 치 : 삼척문화예술회관 대공연장

○ 규 모 : 「생명 존중 이사부의 부활」 1식

○ 내 용 : 4막으로 구성된 융복합극 ‘생명을 존중한 청년 이사부’ 2회 공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 124백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	124		124
시 도 비	62		62
시군구비	62		62

※ 2024 강원 동계청소년 올림픽대회 개최를 위한 한시적 사업으로 향후 사업 추진 여부 미정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1시군 1대표 공연 발굴·지원사업 추진 완료 : 2022. 12월

○ 1시군 1대표 공연 발굴·지원사업 정산 : 2023. 2월

사업명

종교문화여행 치유순례 프로그램

담당자

문화홍보실 홍은주(☎570-3251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 종교문화관광자원을 활용한 치유순례 및 체험 등의 프로그램 구성으로 국민들의 정서적 치유와 사회통합 및 종교관광 활성화를 통한 국내외 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9월 ~2023. 3월[7개월]

○ 위 치 : 천은사, 이승휴 유적지, 영은사, 신흥사, 삼화사, 성내동성당, 하가교회 등

○ 규 모 :  종교문화여행 치유순례 프로그램 1식

○ 내 용 : 삼척의 역사인물 이승휴의 발자취를 따라가는 치유순례 프로그램으로 성지순례 및 봉사프로그램으로 관내 종교문화 관광자원을 활용한 종교적 기능을 체험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 104백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	104		104	88
시 도 비	52		52	44
시군구비	52		52	44

※ 2024 강원 동계청소년 올림픽대회 개최를 위한 한시적 사업으로 향후 사업 추진 여부 미정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 종교문화여행 치유순례 프로그램 추진 완료 : 2023. 03월

○ 종교문화여행 치유순례 프로그램 사업 정산 : 2023. 4월

사업명

생생문화재 활용사업

담당자

문화홍보실 홍은주(☎570-3251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척 죽서루와 도계 긴잎느티나무 및 주변문화자원을 활용한 문화체험 프로그램 기획·운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3월 ~2022. 12월[9개월]

○ 위 치 : 삼척 죽서루일원, 삼척 도계리 긴잎느티나무 공원 일원

○ 규 모 : 생생문화재 활용 1식

○ 내 용 : 삼척 죽서루와 도계길 긴잎느티나무의 가치와 의미를 문화 콘텐츠로 새롭게 창조하여 시민들을 위한 문화공연 및 역사문화 체험의 공간으로 활용

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150		150	237.5
국 비	60		60	95
시 도 비	27		27	42.8
시군구비	63		63	99.7

※ 2024 강원 동계청소년 올림픽대회 개최를 위한 한시적 사업으로 향후 사업 추진 여부 미정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 생생문화재 활용사업 추진 완료 : 2022. 12월

○ 2022년 생생문화재 활용 사업 정산 : 2023. 2월

사업명

삼척정월대보름제

담당자

문화홍보실 손동환(☎570-3225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강원도 무형문화재 제2호, 유네스코 무형문화유산에 등재된 삼척기줄다리기       및 정월대보름의 세시풍속 체험을 통한 전통문화 계승·발전 도모

○ 문화적 자긍심 고취 및 대화합을 도모하고 삼척 고유 전통문화 홍보를 통한       문화도시 삼척의 위상 제고와 지역경제 활성화를 목적으로 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2022. 2.

○ 위 치 : 삼척 시내(우체국 일원)

○ 규 모 : 정월대보름제 기념시설(4종), 제례행사(3종), 민속놀이행사(8종),

체험행사(2종), 부대행사(4종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,466	300	246	460	460
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,466	300	246	460	460
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022 삼척정월대보름제 행사 추진 완료

□ 향후계획

○ 삼척정월대보름제 활성화를 위한 시민 의견 수렴

○ 강원도 우수축제 지정 신청

사업명

삼척정월대보름제

담당자

문화홍보실 손동환(☎570-3225)

□ 사업변경 내역

○ 지출항목 변경 승인 내역(‘22. 2월)

(단위 : 천원)
사업내용 (단위사업명)	예산비목	당초	변경	증△감	비 고
합계		300,000	300,000	0
2022 삼척정월 대보름제	경상운영비	25,010	27,810	2,800
	시설비	65,550	65,550	0
	홍보비	81,600	80,800	△800
	제례행사비	44,700	44,700	0
	민속놀이 행사	8,600	8,600	0
	경축행사	6,300	6,300	0
	체험행사	52,000	50,000	△2,000
	부대행사	16,240	16,240	0

사업명

가곡온천 개발사업(재심사)

담당자

관광개발과 김두현(☎570-3089)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가곡지역 온천개발을 통한 휴양과 관광을 결합한 관광자원 개발로 지역       경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위 치 : 가곡면 탕곡리 509-3번지 일원

○ 규 모 : 종합온천장(지상3층) 및 기반시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,812	11,292	3,520	-	-
시군구비	14,812	11,292	3,520	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기반시설 등 공사 착공 : 2018. 12. 24.

○ 온천공 보호구역 지정 : 2019. 7. 10.

○ 기반시설 등 공사 준공 : 2022. 12. 19.

□ 향후계획

○ 가곡 유황온천 위탁관리 철저

사업명

새천년해안 감성로드 조성 및

명소화사업(새천년 해안도로

썬라이즈 명소화사업)

담당자

관광개발과 김두현(☎570-3089)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해안을 감상할 수 있는 조망권 확보로 일회성 관광이 아닌 다시 찾는 관광지가 될 수 있도록 삼척 관광지의 대표적인 랜드마크 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2024년

○ 위 치 : 교동 산81-2번지 일원

○ 규 모 : 인도교(스카이워크) 1개소(L=100m, H=80m), 경관조명 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,100	4,300	2,000	2,800
국 비
시 도 비	2,275	2,275
시군구비	6,825	2,025	2,000	2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계용역 : 2018. 10월 ~ 2020. 12월

○ 공사 착공 : 2021. 3월

○ 공사 일시 정지 및 사업변경 검토 : 2021. 10월

○ 건설사업관리용역 시행 : 2023. 7월

□ 향후계획

○ 공사 재착공 : 2023. 8월

○ 공사 추진 : 2023. 8월 ~ 2024. 8월

사업명

초곡 용굴 촛대바위길 연장사업

담당자

관광개발과 주재효(☎570-3096)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용굴 촛대바위길 연상사업을 추진하여 근덕면 초곡리~장호리 일원의 해양복합 관광인프라 구축을 통한 명품 관광도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 초곡 용굴 전망대 ~ 초곡리 산 11-1번지 일원

○ 규 모 : 연장(L)=290m(보도현수교 120m, 데크교 130m, 잔도교 40m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500	180	2,000	2,850	3,470
국 비
시 도 비	3,250	100	1,300	1,850	-
시군구비	5,250	80	700	1,000	3,470

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 인허가 추진 완료 : 2022. 12월

○ 공사 및 건설사업관리용역 착수 : 2023. 1월

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 운영관리계획 수립 : 2024. 10월 ~ 12월

○ 공사 준공 : 2024. 12월

○ 준공 후 기존구간과 연계 관리 운영 : 2025. 1월

○ 촛대바위길 개장 운영 : 2025. 1월

사업명

이사부 독도테마 관광마을 조성사업

담당자

관광개발과 이학범(☎570-3093)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이사부독도 기념공원-육향산-문화예술촌에 이르는 관광공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위 치 : 삼척시 정상동 85번지 일원

○ 규 모 : A=6,000㎡, 전시관, 공원, 공방 및 작업실 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,400	3,400	0	400	5,600
시 도 비	3,200	0	0	0	3,200
시군구비	6,200	3,400	0	400	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 이사부 문화 예술촌 조성 기본 계획 수립 및 보고 : 2019. 6월

○ 이사부 역사공원 지정(도시관리계획시설) : 2019. 12월

○ 지방재정투자심사 이행(강원도 심사) : 2022. 8월

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획서 사전검토 용역(건축 기획용역) : 2023. 5월 ~ 9월

○ 리모델링 등 공간조성 실시설계 용역 : 2024. 1월

○ 공사 착공 : 2024. 10월

사업명

삼척 장미축제

담당자

관광정책과 김종욱(☎033-570-3082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 대표 꽃 축제인 삼척 장미축제를 통해 세계 최대 규모인 삼척 장미공원을 널리 알리고 외부 관광객 유입을 통한 지역경기 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. 20. ~ 2023. 5. 24.(연례반복적 사업)

○ 위 치 : 삼척 장미공원 일원

○ 규 모 : 삼척 장미공원 일원(83,760㎡ ) 꽃 축제 1식

- 가수공연, 장미꽃 활용한 포토존 조성, 어린이 놀이터, 퍼레이드 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,937	1075	162	350	350
국 비
시 도 비
시군구비	1,937	1075	162	350	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 삼척 장미축제 기본계획 수립 : 2023. 1월

○ 삼척 장미축제 세부추진 계획 수립 : 2023. 4월

○ 삼척 장미축제 개최 : 2023. 5월

□ 향후계획

○ 2024 장미축제 기본계획 수립 : 2023. 11월

○ 지방재정 투자심사 준비(강원도 의뢰) : 2024년

사업명

디지털 농법 기반 고랭지 스마트팜 조성

담당자

기술보급과 박준환(570-4597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고랭지 스마트팜 조성을 위한 DNA+드론 기술 적용 및 생산·유통·소비        전 과정에 정밀농업 적용으로 생산량, 출하시기, 시장성 예측으로 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년

○ 위 치 : 삼척시, 태백시 고랭지 채소단지

○ 규 모 : 생산단지 2개소(1,320㎡), 산지유통센터 2개소(1,760㎡),

정밀농업 실증 용역 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,402(5,900)백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,402 (5,900)			1,100 (2,150)	2,302 (3,750)
시 도 비	2,727 (4,700)	-	-	850 (1,700)	1,877 (3,000)
시군구비	675 (1,200)	-	-	250 (450)	425 (750)

※ 삼척·태백 연계사업으로, (  )는 총 예산

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.01%)

○ 삼척시 ⇔ 태백시 및 협력기관(LX, 농협) 실무 협의 : 2023. 3월 ~ 4월

○ 삼척시 ⇔ 태백시 공동추진 협약 : 2023. 5월

□ 향후계획

○ DNA+드론 정밀농업 서비스 실증 : 2023년 ~ 2026년

○ 산지유통센터 조성 : 산지유통 선별, 저온저장 시설조성

- 설계, 공유재산 심의:‘23. 8월~10월, 계약 및 공사:‘23. 11월~‘24. 6월

○ 생산단지 조성 : 배추 대체작목 육성(소형양배추)

- 부지선정:‘24. 1월~5월, 육묘장 조성:‘24. 6월~8월, 운영자 선정:‘24. 9월~12월

사업명

노곡면 복지회관 신축사업

담당자

복지정책과 배용호(☎570-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지회관 건물 노후로 인한 부식, 누수 등 유지 보수 비용 과다 발생

○ 현대 농촌 실정에 맞는 건물 구조 확충으로 주민들의 정주의식 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 3월 ~ 2023년 12월

○ 위 치 : 삼척시 노곡면 하월산리 151-2

○ 규 모 : 건물 1동(지상 2층, 연면적 702.21㎡/ 건축면적 376.21㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,449	90	928	2,431	0
국 비
시 도 비
시군구비	3,449	90	928	2,431	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 노곡면 복지회관 신축공사 기본 설계 및 행정절차 완료: 2022. 6월 ~ 12월

○ 공사착공 : 2022. 12. 26.

□ 향후계획

○ 기초 및 외장 공사 추진: 2023. 3월 ~ 7월

○ 건축 내장 및 부대 공사 추진: 2023. 8월 ~ 12월

사업명

노곡분교 활용 마을특화 사업

담당자

전략사업과 박상민(☎570-4032)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노곡면 하월산리는 지역소멸위기 지역으로 노곡분교(폐교)를 활용하여 주민과 관광객이 함께 활용할 수 있는 주민 소득창출 기반시설을 조성하여 관광객 유입 증대 및 일자리 창출로 지역 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2025년

○ 위 치 : 삼척시 노곡면 하월산리 162-3번지 일원

○ 규 모 : 건물연면적(885㎡), 부지면적(8,784㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계				1,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비				1,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 노곡분교 매입 완료, 구조안정성 및 내진성능평가 용역 완료

○ 노곡분교 활용 기본구상 및 운영계획 수립용역 완료

□ 향후계획

○ 용역자료 기반 실시설계용역 및 공사발주

○ 시범보완 및 시범운영

사업명

도계 유리나라 야외정원 조성사업

담당자

폐광지역사업단 백승복(☎570-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도계 유리나라가 실내 작품 관람 위주로 조성되어 있어 개관 이후 지속

적인 관람객 감소에 따라 이를 극복할 대책 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 도계읍 강원남부로 893(유리나라)

○ 규 모 : 야외공간 정원화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,720	20	340	2,000	2,360
국 비	0
시 도 비	3,290		240	1,400	1,650
시군구비	1,430	20	100	600	710
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 유리나라 야외 전시시설 재구성 용역 : ‘20. 4월 ~ 11월

○ 기본 및 실시설계용역 발주 : ’23. 8월

□ 향후계획

○ 야외공간 정원화사업 기본 및 실시설계 : ‘23. 8월 ~ 12월

○ 야외공간 정원화사업 공사  추진 : ’24. 1월 ~ ‘12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

산업전사 기념공원 조성사업

담당자

폐광지역사업단

류한준(☎570-4052)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가산업 발전을 위하여 헌신하신 산업전사의 숭고한 희생정신을 추모하고

지역주민과 함께하는 기념공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2023년

○ 위 치 : 도계읍 흥전리 산1-7번지 일원

○ 규 모 : 기념비, 조형물, 휴게시설 등 기념공원 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,386백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,386	163	39	2,184
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56 %)

○ 산업전사 기념공원 조성사업 공사 중

□ 향후계획

○ 준공 및 개장 : 2023. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

삼척 생활자원회수센터 이전 건립

담당자

환경과 이민규(☎570-3836)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 운영중인 선별시설(15톤/일)의 노후화로 인한 처리용량 부족과 선별시설       효율 저하 발생

- 향후 재활용품 발생량을 산정한 결과 30톤/일 규모의 시설이 필요함.

○ 재활용품 선별시설 현대화 추진으로 안정적인 삼척시 재활용품 처리

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(2년)

○ 위 치 : 강원도 삼척시 남간길 342번지 일원

○ 규 모 : 연면적 약12,000㎡, 건축면적 약 2,500㎡, 시설용량 30Ton/Day

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,210			2,680	6,530
국 비	2,763			804	1,959
시 도 비	1,934.1			562.8	1,371.3
시군구비	4,512.9			1,313.2	3,199.7
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력 평가 심의 완료 : 23. 3월

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 23. 4월

○ 토지감정 평가 실시 : 23. 4월

○ 사업 대상부지(사유지) 보상 완료 : 23. 5월

○ 소규모 환경영향평가 용역 착수 : 23. 6월

○ 도시계획 시설 결정 등 인허가 추진 : 23. 7월

○ 지형현황측량, 지질 기반조사, 폐기물성상조사 등 실시 : 23. 8월

□ 향후계획

○ 산지전용협의 등 인허가 추진 : 23. 09월 예정

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : 23. 12월 예정

○ 도시계획 시설 결정 등 인허가 절차완료 : 23. 12월 예정

사업명

골지천유역 비점오염 저감사업

담당자

환경과 황나경(☎570-3830)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하장면 광동·장전·추동리는 골지천 상류지역에 위치한 흙탕물 발생지역임

○ 비점오염저감시설 설치로 농경지의 토양유실 최소화 및 수생태계 복원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년

○ 위 치 : 강원도 삼척시 하장면 광동·장전·추동리 일원

○ 규 모 : A=33.65km2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계		-	-	324	4,576
국 비		-	-	100	3,330
시 도 비		-	-	4	128
시군구비		-	-	210	99
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	10	1,019

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15 %)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 4월

○ 기본 및 실시설계 사업설명회 개최(원주지방환경청) : 2023. 8월

□ 향후계획

○ 비점오염저감사업 행정절차 이행  : 2023. 9 ~ 12월

- 광동·장전·추동리 주민설명회 및 토지사용승낙서 징구 등

- 소규모 환경영향평가 용역 추진

- 기본 및 실시설계 설계 승인 요청(원주지방환경청)

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2024. 1월

○ 광동·장전·추동리 비점오염저감사업 계약 및 착공 : 2024. 3월

사업명

수소기업 특화산업단지조성사업

담당자

에너지과 이창재(☎570-3757)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수소 관련 기업의 집적화를 통한 수소산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월 ~ 2025. 12월

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 동막리 812 일원

○ 규 모 : 수소특화 산업단지 조성(138,691㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,300		4,281	3,579	8,440
시 도 비	6,800	-	1,300	1,000	4,500
시 비	9,500	-	2,981	2,579	3,940

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 각종 용역 발주(개발계획 수립 및 설계, 전략환경영향평가, 재해영향평가 등)

○ 2023년 강원도 산업단지 지정계획 고시 : 2023. 1월

○ 산업단지 보상계획 및 열람 공고 : 2023. 4월

○ 전략환경영향평가 항목 등의 결정내용 공개 공고 : 2023. 5월

○ 감정평가 현장 실사 : 2023. 6월

○ 수소특화 일반산업단지 승인신청서 및 전략환경영향평가(초안) 제출 : 2023. 7월

○ 주민설명회 개최 및 의견청취 : 2023. 8월

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물 손실보상협의 : 2023. 10월

○ 산업단지계획 심의위원회 심의 및 승인 고시 : 2023. 10월

○ 산업단지 조성 공사 착공 : 2023. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

수소연료전지 스마트 특성화 기반구축사업

담당자

에너지과 김현호(☎570-3743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세라믹 원료·소재를 기반으로 수소에너지 활용산업 지원 플랫폼을 통하여
탄소중립 사회로의 전환 및 수소활용 산업 거점지역으로 고도화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4월 ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 삼척시 교동 515-1번지 일원(에너지방재지원센터 일원)

○ 규 모 : 세라믹 원료·소재 기반 수소연료전지 부품제조 및 상용화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,036	-	4,048	4,400	3,588
국 비	5,987	-	1,200	2,727	2,060
시 도 비	3,000	-	1,417.5	827.5	755
시군구비	3,000	-	1,417.5	827.5	755
기 타	49	-	13	18	18

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 수소에너지부재 공장동 증축 및 리모델링(518.74㎡) 착공

○ 연구시설 장비(8종) 제작, 시험·평가·인증지원(22건) 등

□ 향후계획

○ 공장동 증축, 리모델링 준공 및 장비(15종) 구축 예정

○ 시험·평가·인증 지원(35건) 등 예정

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

마을정비형 공공임대주택 건립

담당자

건축과 이경하(☎570-3458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도계지역 아파트 수요·공급 불균형에 따른 아파트 추가 건립이 필요함에

따라 국토부에서 시행하는 마을정비형 공공임대주택 건립 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2025년

○ 위 치 : 도계읍 도계리 283-2번지 일원

○ 규 모 : 통합공공임대주택 건립 120호, 대지면적 7,946㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,693		294	4,240	26,159
국 비
시 도 비	9,059		294	4,240	4,525
시군구비
지 방 채
민간자본(LH)	21,634				21,634
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘22. 5월 : 사업시행 협약 체결(삼척시→국토교통부)

○ ’22. 7월 : 주택건설사업계획 승인 신청(LH→국토교통부)

□ 향후계획

○ ‘23. 8월 : 주택건설사업계획 승인(국토교통부)

○ ’23. 9월 : 이주사택 리모델링 추진(삼척시)

○ ‘24. 1월 ~ ’25. 12월 : 공동주택 신축공사(LH)

사업명

마읍천 수변공원 조성사업

담당자

건설과 양승진(☎570-3498)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연과 사람이 공존하는 생태하천 조성으로 재해에 안전하고 자연

친화적인 하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2025년 12월

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 덕산리 ~ 교가리 일원(마읍천 하류)

○ 규 모 : 하천정비 및 수변공원 조성 L=2.6㎞, A=390,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		527	30	2,000	11,443
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 추진 : 2018. 7. 13.

○ 투자심사(재심사) 완료 : 2022. 1. 24.

○ 공사 착공 : 2022. 12. 5.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2023. 1월 ~ 2025. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농어촌도로 근덕 205호선 확포장공사

담당자

건설과 이상현(☎570-3489)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌지역 연결 도로망 확충으로 지역간 균형발전 도모와 주거환경 개선        및 오랜 주민 숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 12월 ~ 2023년 4월

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 광태리 283번지 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1,967m(폭 6.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	58	1,852	490
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 : 2019. 1월 ~ 2020. 3월

○ 공사착공 : 2021. 12. 16.

○ 공사준공 : 2023.  4.  8.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : (당초) 2,028백만원 ⇒ (변경) 2,175백만원

* 도로 확장 공사비 증가(현장여건에 따른 내역 증가)

사업명

농어촌도로 하장102호(판문리)선형개선공사

담당자

건설과 이상현(☎570-3489)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌지역 연결 도로망 확충으로 지역간 균형발전 도모와 주거환경 개선        및 오랜 주민 숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 10월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 삼척시 하장면 판문리 산23-7번지 일원

○ 규 모 : 농어촌도로 선형개선 3구간(1구간 340m, 2구간 360m, 3구간 280m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	95	364	2,441
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 : 2021. 10월 ~ 2022. 4월

○ 공사착공 : 2022. 8. 24.

○ 공사정지 : 2022. 9. 23.

- 사토장 선정과 현장사무실 부지 선정 어려움

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2024.  12.

사업명

도계읍 전두교 개축공사

담당자

건설과 박대근(☎570-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도계읍 전두리 일원 오십천 횡단 전두교량의 노후 및 폭원 협소로 인한 차량 교행 및 보행자 통행 불편으로 개축이 시급함에 따라 해당 교량을 개축하여 교통 혼잡 및 통행 불편을 해소하고 균형적인 지역발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4월 ~ 2024. 1월

○ 위 치 : 삼척시 도계읍 전두리 40-44번지 일원

○ 규 모 : 교량개축 L=39.0m(B=20.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	2,500	2,300	1,000	-
국 비
시 도 비
시군구비	5,800	2,500	2,300	1,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 : 2021. 6월 ~ 2022. 6월

○ 공사착공 : 2022. 5. 31.

○ 건설사업관리 착수 : 2022. 12. 22.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 5월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : (당초) 4,700백만원 ⇒ (변경) 5,800백만원

* 교량 개축 공사비 증가(실시설계 성과에 따른 내역 증가)

사업명

골지천 장전교 가설사업

담당자

건설과 양승진(☎570-3498)

□ 사업목적 및 필요성

○ 골지천내 원거리 이동에 따른 주민통행불편사항 해소

○ 고랭지채소 주산지로 영농비용 절감 및 농작물 반출로 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 삼척시 하장면 장전리 213-4번지 일원

○ 규 모 : 교량 L=70m, B=7m, 접속도로 및 호안정비 L=200m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	0	0	200	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 추진 : 2023. 2. 1.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2024. 3월 ~ 2024. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2022년 삼척대게축제

담당자

해양수산과 신상우(☎570-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대게의 본 고장이 삼척임을 공식적으로 홍보할 수 있는 기회의 장 마련

○ 새해 해맞이 행사 시기에 맞춰 수산물 축제 개최로 먹거리 및 즐길거리를

제공하여 삼척대게의 상품성 구축 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. 31. ~ 2023. 1. 2.

○ 위 치 : 삼척항(삼척시 정하동 41-282)

○ 규 모 : 축제개최 1식(공연, 체험, 먹을거리 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원(307-04, 민간행사보조)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	280	-	280	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	280	-	280	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 추진완료 / 100%)

○ 2022년 삼척대게축제 투자심사 : 2022. 7. 13. ~ 7. 20(조건부 승인)

○ 삼척대게축제 기본계획 수립 : 2022. 7. 13.

○ 보조사업자 선정 및 보조금 교부결정 : 2022. 11. 14. ~ 12. 12.

○ 2022년 삼척대게축제 일상감사 : 2022. 12. 5. ~ 12. 6.(적정)

○ 안전관리계획 수립 및 제출(해양수산과→재난안전과) : 2022. 12. 14.

○ 2022년 삼척대게축제 개최 : 2022. 12. 31. ~ 2023. 1. 2.

사업명

삼척 어울림플라자 조성사업

담당자

체육과 임현규(☎570-3820)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘20년 생활SOC 복합화 공모사업 선정에 따라 체육·문화·가족 교류 공간을       확충하여 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼척시 남양동 55-6번지 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 부지면적 1,841.34㎡, 연면적 3,541.74㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,380	5,652	2,584	9,144
국 비	3,600	1,200	1,013	1,387
시 도 비	750	250	156.5	343.5
시군구비	13,030	4,202	1414.5	7,413.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67.72%)

○ 철근콘크리트공사(3층) : 2023. 3월

○ 철근콘크리트공사(4층) : 2023. 6월

□ 향후계획

○ 내·외부 마감공사 : 2023. 9월

○ 공사준공 및 시범운영 : 2023. 12월

□ 사업변경 내역(변경)

○ 사업규모 : 지하1층, 지상4층, 부지면적 2,250㎡, 연면적 3,564㎡

(지하1층, 지상4층, 부지면적 1,841.34㎡, 연면적 3,541.74㎡)

○ 총사업비 : 109억(173억)

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.(2020. 1. ~ 2023. 12.)

사업명

제30회 강원도민생활체육대회

담당자

체육과 김상호(☎570-3821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 한마당 잔치를 통한 강원도민의 화합과 친선 도모

○ 스포츠 도시 홍보 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월

○ 위  치 : 삼척시 뒷나루길 153(삼척시민복합체육공원 외 종목별 경기장)

○ 사업량 : 25개종목, 18개 시·군, 8,000여명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,000	-	955	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	1,000	-	955	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제30회 강원도민생활체육대회 기본계획 수립 : 2021. 12월

○ 도민생활체육대회 TF팀 구성 : 2022. 3월

○ 대회 홍보계획 수립 : 2022. 6월

○ 개·폐회식 실행계획 : 2022. 7월

○ 대회 운영 및 성료 : 2022. 9월

사업명

동해왕 이사부장군배 전국 철인3종 대회

담당자

체육과 송연진(☎570-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠를 통한 관광객 유치와 차별화된 스포츠 마케팅으로 지역경제

활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 7. ~ 2022. 11. 4.  ※ 대회일 : 2022. 9. 17. ~ 9. 18.(2일)

○ 위 치 : 근덕면 덕산해변 일원

○ 규 모 : 600명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원(보조금 50백만원, 자부담 60백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	210	-	110	50	50
국 비
시 도 비
시군구비	210	-	110	50	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 선수단 600명 참가

○ 전국단위 철인3종 대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 2023년 동해왕 이사부장군배 전국 철인3종 대회 개최 : 2023. 9월

사업명

삼척 황영조 국제 마라톤 대회

담당자

체육과 송연진(☎570-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 몬주익의 영웅 황영조 선수의 바르셀로나올림픽 마라톤 제패 기념 및

마라톤 인구 저변 확대 및 국제대회 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 28. ~ 2023. 7. 31. ※ 대회일 : 2023. 5. 21.(1일)

○ 위 치 : 삼척시 엑스포 광장

○ 규 모 : 4,000여명

○ 대회종목 :4개종목(풀코스,하프,10km,5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	990	-	290	350	350
국 비
시 도 비
시군구비	990	-	290	350	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023년 제1차 지방재정 투자심사 승인(도심사)

○ 4,000여명 참가

○ 안전하게 대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 2024년 삼척 황영조 국제 마라톤 대회 개최 : 2024. 4월

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	290	350	증액60백만원

사업명

삼척시 동호인 생활체육대회

담당자

체육과 송연진(☎570-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 동호인들의 화합의 장 마련 및 사기진작

○ 다양한 계층의 생활체육인의 참여로 생활체육 저변 확대 및 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. 11. ~ 2023. 12. 31.  ※ 대회일 : 종목별 개최

○ 위 치 : 삼척 복합체육공원 등 종목별 경기장

○ 규 모 : 14종목, 1,500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	198	-	0	78	120
국 비
시 도 비
시군구비	198	-	0	78	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 선수단 14종목, 1,500여명 참가예정

○ 종목별 생활체육 대회 개최 진행 중

- 대회 개최 기간 : 2023. 5. 11. ~ 2023. 12. 31.

- 진행상황 : 9종목 개최 완료, 5종목 개최 예정

□ 향후계획

○ 2024년 삼척시 동호인 생활체육대회 개최 : 2024. 1월 ~ 6월

사업명

삼척시 전국 유소년클럽 축구대회

담당자

체육과 송연진(☎570-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠를 통한 관광객 유치와 차별화된 스포츠 마케팅으로 지역경제

활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. 25.~ 2023. 2. 28.  ※ 대회일 : 2023. 2. 3.~ 2023. 2. 7.(5일)

○ 위 치 : 삼척 복합체육공원 외 2개구장

○ 규 모 : 48팀, 2000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150	-	-	150
국 비
시 도 비
시군구비	150	-	-	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 선수단 48팀 2,000명 참가

○ 전국단위 축구대회 개최 완료

사업명

2023 동계 축구 스토브리그 운영

담당자

체육과 김상호(☎570-3821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동계 훈련에 훌륭한 기후 조건 홍보와 우리시 체육 인프라를 활용한

축구 스토브리그를 유치하여 스포츠 도시 이미지 부각

□ 사업개요

○ 기  간 : 2023년 1월 ~ 2023년 2월

○ 위  치 : 삼척시 복합체육공원 축구장 외 3개 보조구장

○ 사업량 : 전국단위 축구대회 개최, 720여명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	130	-	-	74	-
국 비
시 도 비
시군구비	130	-	-	74	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 스토브리그 개최 세부일정 협의 : 2022. 11월

○ 대회준비 실무회의 : 2022. 12월

○ 대회 개최 및 운영 : 2023. 1월

○ 사업 성과 평가 : 2023. 2월

사업명

제18회 강원도 어르신생활체육대회 개최

담당자

체육과 김상호(☎570-3821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행복하고 활기찬 노후 생활여건 조성을 위한 생활체육 참여의 장 마련

○ 어르신 생활체육에 대한 사회적 관심 제고와 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2023년 1월 ~ 2023년 5월

○ 위  치 : 삼척복합체육공원 외 종목별 경기장

○ 사업량 : 15개종목, 18개 시·군, 3,000여명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	180	-	-	179
국 비
시 도 비
시군구비	180	-	-	179	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 출전 종목 세부일정협의 : 2022. 12월

○ 대회요강 및 추진계획 수립 : 2023. 1월 ~ 2월

○ 주관단체 실무회의 및 종목별 선수선발 : 2023. 3월

○ 선수단 결단식 및 종목별 대회 개최 : 2023. 4월

○ 대회 운영 및 성료 : 2023. 4월

사업명

삼척시장배 전국 동호인 초청 족구대회

담당자

체육과 송연진(☎570-3813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국대회 개최를 통한 대외적 삼척 이미지 제고 및 지역경제 활성화

○ 삼척시 주요 관광지 홍보 및 체육 인프라 구축 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 2. 1.~ 2023. 4. 30.  ※ 대회일 : 2023. 3. 25.(1일)

○ 위 치 : 강원대학교 삼척캠퍼스 족구장

○ 규 모 : 1,500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150	-		150
국 비
시 도 비
시군구비	150	-		150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 선수단 1,500명 참가

○ 전국단위 족구대회 개최 완료

사업명

복합노인복지관 건립공사

담당자

사회복지과 유범희

(☎570-3852)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 노인인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 노인들이 활기차고 건강한

노후를 보낼 수 있도록 시설과 제도 구축이 필요한 실정

○ 현재 운영 중인 노인복지관의 이용수요는 계속 증가하나 시설부족문제가

야기되고 있어 인근 부지에 복합노인복지관 건립을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 삼척시 남양동 7-1번지 일원

○ 규 모 : 신축1동(지상3층, 연면적 2,986.26㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,500	7,512	1,613	5,500	3,875
국 비
시 도 비
시군구비	18,500	7,512	1,613	5,500	3,875
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 설계공모 및 실시설계 : 2021. 3월 ~ 2022. 2월

○ 공사 착공 : 2022. 12월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 9월

사업명

삼척맹방유채꽃행사운영지원

담당자

농정과  김미라(☎570-3375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척시 대표 봄축제인 삼척맹방유채꽃행사의 효율적․성공적 운영발판

○ 삼척을 찾은 관광객에게 즐거움과 볼거리 제공 및 시민에게는 휴식과 삶       의 질 향상으로 대표 지역 축제의 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ~ 12월 (행사 매년 4~5월)

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 상맹방리 일원

○ 규 모 : 면적 71,164㎡ ,상맹방리 219번지외 30필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	174	80	56	9.5	28.5
국 비
시 도 비
시군구비	174	80	56	9.5	28.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진에 따른 준비,계획수립(수시) : 2022. 1월 ~ 12월

○ 안전관리 계획수립(수시) : 2022. 3월 ~

○ 행정절차 이행(보조금 지급,성과보고) : 2022. 3월 ~ 5월

□ 향후계획

○ 유채꽃행사 재배지 관리 퇴비살포 용역추진 : 2023. 8월 ~ 12월

□ 사업변경 내역

-

사업명

2023년도 삼척시 ITS 구축사업

담당자

교통과 김도훈(☎570-3556)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해고속도로의 삼척 IC 연장과, LNG 가스기지 건설 그리고 지속적으로  증가하는 관광수요로 인해 증가된 교통문제와 7번, 38번 국도 및 삼척IC에서 내부로 유입되는 통과 교통류에 우회도로 안내를 통해 교통량을 분산하는 교통흐름의 개선이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년~2024년(2년 연속사업)

○ 위 치 : 삼척시 관내 총 연장 약21km

○ 규 모 : ITS 현장시스템 1식 및 센터시스템 1식 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,410백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,410			3,410	-
국 비	2,046	-	-	2,046	-
시 도 비	136.4	-	-	136.4	-
시군구비	1,227.6	-	-	1,227.6	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 사업 발주를 위한 행정절차(계약심사, 보안성 검토 등) 이행 완료

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 사업관리용역 계약 체결 완료

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업용역 사전규격 및 입찰 공고 완료

□ 향후계획

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 제안서 평가회 개최

○ 구축사업자 협상 및 계약 후 구축사업 확정설계 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

삼척시 대형공영주차장 조성사업

담당자

교통과 김효빈(☎570-3938)

□ 사업목적 및 필요성

○ 터미널 옆 공영주차장에 삼척의료원 건립으로 화물차 주차장 대체 필요

○ 건설사업장 투입차량 증가 추세에 따라 대형차량 불법주차 증가로 시가지 주차질서 혼란, 도시미관 저해

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 2월~2025년

○ 위 치 : 삼척시 등봉동 산114-1번지 일원(21,520m2)

○ 규 모 : 지상 / 163면(대형 156면, 소형 7면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	36	233	430	3,301
국 비
시 도 비	2,146				2,146
시군구비	1,854	36	233	430	1,155
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 구상 및 타당성 조사 용역 : 2021년 2월~8월

○ 기본 및 실시설계 / 도시관리계획(주차장) 결정 / 재해영향성검토 용역 시행 : 2022년 4월~2023년 8월(중단)

○ 2024년 (도)주차환경 개선사업 공모 신청 : 2023년 6월

□ 향후계획

○ 도비 확보 여부에 따라 도비 또는 시비 사업으로 진행